Arbeitsauftrag 2

Projekte lassen sich in Projektphasen bzw. Projektschritte unterteilen. Skizzieren Sie das Projekt Internet-Cafe mit Hilfe eines geeigneten Phasenmodells, und ordnen Sie den einzelnen Projektphasen Aufgaben zu.

Projektphasen
	Aufgaben	
Projektidee, –anstoß, Problemdefinition
	-	Problemsituation erfassen
-	Anforderungen analysieren
-	Ist-Zustand feststellen
-	Kickoff-Meeting durchführen
	
Zielformulierung

	-	Sollkonzept entwickeln
-	Projektziele definieren
-	Projektantrag, -auftrag erstellen
-	Entscheidung über Projektdurchführung
-	Pflichtenheft erstellen
	
Planung

	-	Teilaufgaben identifizieren
-	Aufgaben verteilen (Projektorganisation)
-	Projektablaufplan inkl. Zeitplan erstellen
-	Kosten kalkulieren
-	Maßnahmen zur Qualitätssicherung planen
  	
Durchführung

	-	Umsetzung der Projektplanung z. B. Erstellung eines Produktes oder Durchführung einer Schulung	
Kontrolle

	-	Kontrollieren, ob Projektziele erreicht wurden
-	Kosten- und Terminziele überwachen
-	Abweichung ggf. begründen
-	ggf. Korrektur von Projektschritten
	
Abschluss und Dokumentation
	-	Präsentation des Projektes
-	Abnahme des Produktes
-	Einführung des Produktes
-	Projektbericht schreiben